공약연번	어촌뉴딜 300사업 노후어항 현대화사업 지속 추진		담당부서
90
			해양항만과

	최종목표
어촌지역의 환경을 개선하고 기반조성을 통한 국민휴양 및 수산특화형 어촌․어항 조성

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	70%	총사업비	38,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2023.

○ 위    치 : 관내 4개 도서(달리도․외달도, 율도, 고하도)

○ 사 업 량 : 3개 어촌뉴딜300사업 (35개 단위사업)

- 달리도․외달도 어촌뉴딜 300사업(2019년~2022년 / 15개 단위사업 / 134억원)

- 율도 어촌뉴딜 300사업        (2020년~2023년 / 12개 단위사업 / 123억원)

- 고하도 어촌뉴딜 300사업      (2021~2023년 / 8개 단위사업 / 123억원)

○ 사업내용 : 낙후 어항 현대화 및 배후 어촌 환경개선 등

○ 사 업 비 : 380억원(국비70% 266 도비9% 34 시비21% 80)

☐ 추진현황

○ 2019년 달리도․외달도 어촌뉴딜 300사업

- 달리도 쉬어가 조성사업 등 15건 단위사업 완료

○ 2020년 율도 어촌뉴딜 300사업

- 율도1구 선착장 정비 등 4개 단위사업 완료

- 오토캠핑장 조성 및 율도 8경 조성 등 7개 단위사업 추진 중

○ 2021년 고하도 어촌뉴딜 300사업

- 응박개항 선착장 환경정비 등 4개 단위사업 추진 중

- 용오름 마루 조성 등 4개 단위사업 실시설계 중

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
36회	3회	108회	6회	-

* (설명회 4회/년)×3년×3개사업 , (만족도 조사 1회)×3개사업,

(위원회 12회/년)×3년×3개사업, (언론 2회/년)×3년

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	단위사업 완료 : 10건	단위사업 완료 : 10건	30%
2023	단위사업 완료 : 35건	단위사업 완료 : 19건	70%
2024
2025
2026

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	38,000	31,786	6,214
확보액	38,000	31,786	6,214
집행액	38,000	16,577	8,553

☐ 향후계획

○ 오토캠핑장 조성 및 율도8경 조성 등 7개 사업 완료  : ‘23. 12.

○ 응박개항 선착장 환경정비 등 8개 사업 완료         : ‘23. 12.

※목차

담당부서		해양항만과장 강혜선 섬자원개발팀장 나창영 주무관 강기한(☎8328)